Lucrari de reparatie a cazangeriei  anexei cladirei primariei din s.Purcari, r-nul Stefan Voda	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  105 226 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Demolari
					
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton
	m	7,0000	49,192
——————————
49,192
	344,344
——————————
344,344
	
 2	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare
	m2	5,3000	67,166
——————————
67,166
	355,980
——————————
355,980

		Total	 Lei			 700,324
	
		Total Demolari
Inclusiv salariu				700,324
700,324	
		2. Fundatia
					
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	1,0000	293,260
——————————
293,260
	293,260
——————————
293,260
	
 4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	1,6000	105,006
——————————
105,006
	168,010
——————————
168,010
	
 5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	1,6000	47,700
——————————
0,000
	76,320
——————————
0,000
	
 6	CC01D1	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	11,2000	24,550
——————————
5,960
	274,958
——————————
66,750
	
 7	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	1,0000	2 255,913
——————————
780,450
	2 255,913
——————————
780,450

		Total	 Lei			 3 068,461
	
		Total Fundatia
Inclusiv salariu				3 068,461
1 308,470	
		3. Carcasa metalica
					
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	436,1000	39,218
——————————
19,866
	17 103,187
——————————
8 663,563
	
 9	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	14,2000	137,590
——————————
104,060
	1 953,778
——————————
1 477,652

		Total	 Lei			 19 056,965
	
		Total Carcasa metalica
Inclusiv salariu				19 056,965
10 141,215	
		4. Pereti
					
10	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" gr. 80mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 
	m2	19,2000	1 086,387
——————————
129,602
	20 858,639
——————————
2 488,358

		Total	 Lei			 20 858,639
	
		Total Pereti
Inclusiv salariu				20 858,639
2 488,358	
		5. Acoperis
					
11	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" gr 80mm montate pe rigle metalice. 
	m2	7,5000	1 062,882
——————————
141,900
	7 971,614
——————————
1 064,250

		Total	 Lei			 7 971,614
	
		Total Acoperis
Inclusiv salariu				7 971,614
1 064,250	
		6. Pardosea
					
12	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	0,4500	293,260
——————————
293,260
	131,967
——————————
131,967
	
 13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului 
	m2	0,8000	278,810
——————————
160,820
	223,048
——————————
128,656
	
 14	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3	0,4000	747,520
——————————
113,520
	299,008
——————————
45,408
	
 15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	21,2000	22,667
——————————
2,838
	480,535
——————————
60,166
	
 16	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	4,0000	215,870
——————————
99,330
	863,480
——————————
397,320
	
 17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	4,0000	117,655
——————————
66,220
	470,620
——————————
264,880
	
 18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	4,0000	516,817
——————————
274,340
	2 067,270
——————————
1 097,360

		Total	 Lei			 4 535,928
	
		Total Pardosea
Inclusiv salariu				4 535,928
2 125,757	
		7. Timplarie
					
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,6400	2 290,251
——————————
76,626
	3 756,012
——————————
125,667
	
 20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	0,4000	2 127,325
——————————
88,925
	850,930
——————————
35,570

		Total	 Lei			 4 606,942
	
		Total Timplarie
Inclusiv salariu				4 606,942
161,237	
		8. Amenajare
					
21	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	1,4000	293,260
——————————
293,260
	410,564
——————————
410,564
	
 22	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar 100*25*8
	m	4,0000	214,345
——————————
66,220
	857,380
——————————
264,880
	
 23	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
	100m2	0,0300	1 004,233
——————————
854,233
	30,127
——————————
25,627
	
 24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	0,3000	696,653
——————————
93,653
	208,996
——————————
28,096
	
 25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm
	m2	3,0000	355,587
——————————
98,762
	1 066,762
——————————
296,287

		Total	 Lei			 2 573,829
	
		Total Amenajare
Inclusiv salariu				2 573,829
1 025,454	

		Total	 Lei			63 369
	
		CAS	24 %			4 564
	
		Cheltuieli de transport	10 %			4 314
	
		Cheltuieli de regie	14,5 %			10 477
	
		Beneficiu de deviz	6 %			4 964
	
		TVA	20 %			17 538

Total deviz:
Inclusiv salariu				105 226
——————
19 015

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Lucrari de reparatie a cazangeriei anexei cladirei primariei din s.Purcari, r-nul Stefan Voda	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 

Valoarea de deviz  105 226 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,6500	94,60	1 102,090	
 2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1908	94,60	112,650	
 3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,1600	94,60	109,736	
 4.	7129020012800	Pavator	h-om	9,1922	94,60	869,582	
 5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5372	94,60	145,419	
 6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,8400	94,60	1 214,664	
 7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,6200	94,60	1 477,652	
 8.	7212030022700	Sudor	h-om	4,3610	94,60	412,551	
 9.	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	9,0000	94,60	851,400	
 10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	106,8590	94,60	10 108,861	
 11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3439	94,60	221,733	
 12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,9690	94,60	943,069	
 13.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	6,1268	94,60	579,595	
 14.	9312040019600	Sapator	h-om	9,1550	94,60	866,063	
		Total manopera				19 015	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,5415	3,50	22,895	
 2.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,4400	465,00	204,600	
 3.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,3450	465,00	160,425	
 4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3640	450,00	163,800	
 5.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7156	450,00	322,020	
 6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1680	450,00	75,600	
 7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2455	450,00	560,475	
 8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0150	450,00	6,750	
 9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,2280	450,00	102,600	
 10.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1000	450,00	45,000	
 11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7100	4,00	2,840	
 12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0016	4 250,00	6,800	
 13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 250,00	68,000	
 14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0016	4 250,00	6,800	
 15.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	80,0000	0,10	8,000	
 16.	2010237318750	Distantieri 	buc	8,0400	1,50	12,060	
 17.	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	0,4000	1 950,00	780,000	
 18.	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,6400	2 150,00	3 526,000	
 19.	2320166200676	White spirit	kg	1,4200	46,20	65,604	
 20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,0960	14,50	1,392	
 21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,9474	75,00	446,055	
 22.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,4140	86,00	207,604	
 23.	24302261000001	Fuga	kg	1,2000	42,50	51,000	
 24.	2430226100700	Grund  alchidic	kg	1,4768	52,00	76,794	
 25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3858	125,00	48,225	
 26.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,7100	52,00	36,920	
 27.	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,5620	46,20	72,164	
 28.	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	63,2832	24,50	1 550,438	
 29.	2523156720006	Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama) 	kg	19,7370	24,50	483,556	
 30.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4,8000	2,40	11,520	
 31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	493,8200	2,40	1 185,168	
 32.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	79,2000	2,40	190,080	
 33.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,6000	4,10	14,760	
 34.	266111280065525	Placi din beton, pentru trotuare  gr. 40mm	m2	3,0450	145,00	441,525	
 35.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,1200	200,00	824,000	
 36.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6100	0,00	0,000	
 37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1920	0,00	0,000	
 38.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	16,2000	4,10	66,420	
 39.	266612280030122	Bordura  pentru trotuare 100*25*8	m	4,0200	75,00	301,500	
 40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0640	5,00	20,320	
 41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1060	17,60	1,866	
 42.	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	11,4800	17,60	202,048	
 43.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,3610	32,50	141,732	
 44.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1200	32,50	3,900	
 45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3240	32,50	10,530	
 46.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	436,1000	18,60	8 111,460	
 47.	281123630490311	Panouri  "Sandwich" gr. 80mm	m2	20,1715	762,50	15 380,769	
 48.	281123630490312	Panouri  "Sandwich" gr 80mm	m2	7,8030	796,80	6 217,430	
 49.	2873122004100	Plase sudate 	kg	21,4120	18,60	398,263	
 50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	37,50	7,500	
 51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,1805	75,00	163,537	
 52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,9600	0,20	1,792	
 53.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	59,3280	3,20	189,850	
 54.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	82,2780	0,50	41,139	
 55.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	22,9500	3,60	82,620	
 56.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0600	300,00	18,000	
 57.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,5288	0,00	0,000	
 58.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	0,00	0,000	
 59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,4263	0,00	0,000	
 60.	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000	
		Total materiale de construcţii				43 140	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1260	125,00	15,750	
 2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0630	75,00	4,725	
 3.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0127	300,00	3,810	
 4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1158	22,50	25,106	
 5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0360	125,00	4,500	
 6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0480	35,00	1,680	
 7.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0080	55,00	0,440	
 8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000	
 9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1840	55,00	10,120	
 10.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0480	55,00	2,640	
 11.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0800	55,00	4,400	
 12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0320	125,00	4,000	
 13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9200	500,00	960,000	
 14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000	
 15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1696	450,00	76,320	
		Total utilaje de construcţii				1 214	

	Total	 Lei			63 369	
	CAS	24 %			4 564	
	Cheltuieli de transport	10 %			4 314	
	Cheltuieli de regie	14,5 %			10 477	
	Beneficiu de deviz	6 %			4 964	
	TVA	20 %			17 538	
	Total deviz:				105 226	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de constructie a anexei cladirei primariei din s.Purcari, r-nul Stefan Voda	Investitor Primaria Purcari	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demolari
					
1	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton
	m			49,192
—————
49,192	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2600	94,60	24,60	
2	RpCS19A
	Demontari: dale din beton, la trotuare
	m2			67,166
—————
67,166	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	94,60	33,11	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3600	94,60	34,06	
		2. Fundatia
					
3	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3			293,260
—————
293,260	
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26	
4	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t			105,006
—————
105,006	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01	
5	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t			47,700
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70	
6	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg			24,550
—————
5,960	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38	
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,60	18,04	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	1,50	0,23	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,50	0,33	
7	CA03C3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3			2 255,913
—————
780,450	
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	94,60	742,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,40	701,57	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	450,00	349,88	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	322,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900	0,00	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00	
		3. Carcasa metalica
					
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg			39,218
—————
19,866	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,50	0,32	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,60	18,60	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05	
9	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2			137,590
—————
104,060	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1040	52,00	5,41	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	46,20	5,08	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	52,00	2,60	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	86,00	14,62	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	46,20	4,62	
		4. Pereti
					
10	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" gr. 80mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 
	m2			1 086,387
—————
129,602	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	94,60	118,25	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200	94,60	11,35	
	281123630490311	Panouri  "Sandwich" gr. 80mm	m2	1,0200	762,50	801,08	
	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	3,2000	24,50	80,75	
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	3,20	9,89	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,50	1,55	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,52	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00	
		5. Acoperis
					
11	CE44A
	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" gr 80mm montate pe rigle metalice. 
	m2			1 062,882
—————
141,900	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,2000	94,60	113,52	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38	
	281123630490312	Panouri  "Sandwich" gr 80mm	m2	1,0200	796,80	828,99	
	2523156720006	Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama) 	kg	2,5800	24,50	64,47	
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	3,60	11,02	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,50	1,53	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,85	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	22,50	1,13	
		6. Pardosea
					
12	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3			293,260
—————
293,260	
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26	
13	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului 
	m2			278,810
—————
160,820	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	32,50	4,88	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	37,50	9,38	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,50	1,74	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 250,00	8,50	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 250,00	8,50	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 250,00	85,00	
14	CG32B1
	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3			747,520
—————
113,520	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	94,60	75,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84	
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	450,00	112,50	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	1,1000	465,00	511,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	125,00	10,00	
15	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg			22,667
—————
2,838	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	18,60	18,79	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,60	0,09	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,50	0,33	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	1,50	0,45	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	300,00	0,18	
16	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2			215,870
—————
99,330	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,87	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,40	57,60	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	450,00	29,25	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,00	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	55,00	0,11	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	22,50	2,25	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33	
17	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			117,655
—————
66,220	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,50	0,68	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66	
18	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2			516,817
—————
274,340	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,10	16,61	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,50	12,75	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,10	3,69	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,50	1,01	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42	
		7. Timplarie
					
19	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			2 290,251
—————
76,626	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45	
20	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2			2 127,325
—————
88,925	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,41	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,88	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45	
		8. Amenajare
					
21	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3			293,260
—————
293,260	
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26	
22	CO03A
	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar 100*25*8
	m			214,345
—————
66,220	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	94,60	58,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,00	0,00	
	266612280030122	Bordura  pentru trotuare 100*25*8	m	1,0050	75,00	75,38	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	450,00	23,40	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	2,40	32,10	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	450,00	13,95	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0130	0,00	0,00	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	55,00	2,20	
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	55,00	1,10	
23	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
	100m2			1 004,233
—————
854,233	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,23	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00	
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	125,00	150,00	
24	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3			696,653
—————
93,653	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	465,00	534,75	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50	
25	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm
	m2			355,587
—————
98,762	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0316	94,60	2,99	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,40	63,36	
	266111280065525	Placi din beton, pentru trotuare  gr. 40mm	m2	1,0150	145,00	147,18	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	450,00	34,20	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00	

					APROBAT:  
    Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.