Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte, din or. Criuleni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări 
Reparatie acoperis

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolare
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	530,64	
 2	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	530,64	
 3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	3,00	
 4	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborirea gunoiului de pe acoperis)	t	18,30	
 5	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	18,30	
 6	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	18,30	
 		Capitolul 2. Reparatia acoperisului			
7	RpCH05A
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	180,00	
 8	RpCH05D
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	24,00	
 9	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (Scindura 100*30 -4.8 m3) 	m2	599,62	
 10	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	6,80	
 11	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,80	
 12	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	599,62	
 13	CE09B
	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (Tegolit)  la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului (Placi de acopris ondulate Tegolit fabricat in Italia, Pentru scindura de rasinoasa K=0)
	m2	599,62	
 14	CE42A
	Executarea lucarnelor 	buc	2,00	
 15	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	56,04	
 16	CN16C
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei  in  2 straturi la obloane rulante	m2	56,04	
 17	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m	98,20	
 18	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D88mm)	m	56,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.