CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Gimnaziu s.Cupcui
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Gimnaziu s.Cupcui
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia acoperisului plat a Blocului central  la Gimnaziul din s.Cupcui r-nul Leova
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demontari
	
1	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - picuritor (капельник) din tabla zincata
	m	80,0000
	
2	TRI1AA04C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	0,1800
	
3	TrB22E6A
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t
	t	1,4500
	
		2. Lucrari de reparatie acoperisului
	
4	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2	23,0000
	
5	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	160,0000
	
6	RpCI30A
	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice
Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550
	m	40,0000
	
7	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	715,0000
	
8	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu
Material marunt=1,0500
	m2	715,0000
	
9	CE23C3
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm
Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400
	m	141,0000