Caiet de sarcini NR.1
1.	Descriere generală. 
Lucrările vor fi petrecute  la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A.
Perioada de execuție: aprilie – decembrie 2022;
Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 5 ani.
2. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor.
Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate la restabilirea pavajului. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar. 
3. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte 
necesare pentru executarea lucrărilor.
Manopera: Betonist, Dulgher, Pavator, Muncitor necalificat, Muncitor deservire CM, Muncitor deservire, Muncitor.
Materiale: Ciment, marca 400, Piatra sparta 20-40 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm , Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi), Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat), Nisip pentru amenajare, Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm, Lemn rotund de rasinoase, Scinduri de rasinoase, Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm, Decofrol, Ciment portland , Ciment portland P 40 saci S388, Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi), Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Ciment portland M400 saci, (pentru strat), Placi de trotuare din beton prefabricate, Placi din beton, pentru trotuare, Placi din beton, pentru trotuare din beton prefabricat ECO, Piatra kosouts, Beton M-150, Beton clasa...(pt.informatie), Beton B-15, Mortar, Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200, Pavele de granit despicat, Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2, Sirma neagra moale d = 2,5 mm, Cuie cu cap conic tip A pentru constructii, Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm, Piulite uzuale patrate M 10, Saibe uzuale M 10, Scoabe din otel pentru constructii, Disc abraziv, Disc pentru taiat placi, Disc pentru taiat placi, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Apa pentru mortare si betoane, Apa,
Utilaje de construcţii: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg, Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min, Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min, Compactor 5-6 t, Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc, Vibrator de adincime, Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw, Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP), Automacara 6 - 10 tf, Autobasculanta-5t, Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire.

4. Cerinţe privind calculul costului.
Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea proceselor verbale inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu cerințele Ordinului Termoelectrica nr. 190 din 31.12.2021.

5. Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare.
Nr.	Denumirea documentului	
1.	Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașulul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” CHIȘINĂU 1991.	

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.
1.	Licența companiei; 
2.	Experienţa în domeniu;
3.	Documente confermative că compania este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;
4.	Deținerea personalului calificat;
5.	În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor tehnico-normative;
6.	Deviz-lucrări (forme 3,5,7) WinSmeta.

7.  Cerinţe de mentenanţă.
1.	Termenul de executare – 10 zile din data semnării actului de primire sub restabilirea pavajului, semnat de ambele părți; 
2.	La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;
3.	La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;
4.	Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.
Formularul de deviz 
Lista cu cantități de lucrări

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontarea.
			
1	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)
	m	500,00	
 2	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
	m	1.500,00	
 3	DG02A
	Desfacerea de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Разборка тротуарной плитки )
	m2	3.000,00	
 4	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate (Разборка: плиты из сборных пластин)
	m2	200,00	
 5	RpCG23A
	Curatarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat (Чистка и укладка в штабель плитки, включая вывоз строительного мусора)
	buc	200.000,00	
 6	TrB05A2-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 10 м)
	t	50,00	
 7	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)
	t	50,00	
 8	TrB05A2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)
	t	50,00	
 9	TrB05A2-4
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 40 м)
	t	50,00	
 10	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 50 м)
	t	50,00	
 11	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 90 м)
	t	50,00	
 12	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка   )
	100 m3	4,00	
 13	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка  в автотранспорт)
	t	300,00	
 14	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	50,00	
 15	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)
	t	50,00	
 16	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)
	t	100,00	
 17	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 20 км)
	t	150,00	
 18	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)
	t	300,00	
 19	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 30 км)
	t	400,00	
 		Capitolul 2. Montarea.
			
20	DA15A
	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное основание толщиной 10 см для тротуаров, аллей для пешеходов и для велосипедов, выполненное на заранее подготовленную подушку)
	m2	300,00	
 21	DA15B
	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare  (Бетонное основание толщиной 10 см для тротуаров, аллей для пешеходов и для велосипедов, выполненное по песчанному слою толщиной 5 см после укатки)
	m2	300,00	
 22	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)  
	m3	750,00	
 23	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)
	m3	750,00	
 24	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare  (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)
	m2	400,00	
 25	DI112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать)
	m2	3.200,00	
 26	DD07A
	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din calupuri calitatea I
	m2	200,00	
 27	IzG35A
	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu discuri abrazive
	m	200,00	
 28	DD08A
	Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm
	m2	150,00	
 29	DE13A
	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором)
	m2	150,00	
 30	DE13A
	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором)    (  Fara  pavaj )
	m2	500,00	
 31	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток),  asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate, dimensiuni (m), 0,21x0,105x0,06.  Cantitate placi la 1m2 egala cu 45,35 buc.  
	m2	600,00	
 32	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) (  Fara  pavaj ), asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate, dimensiuni (m), 0,21x0,105x0,06.  Cantitate placi la 1m2 egala cu 45,35 buc.  
	m2	2.600,00	
 33	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)  Placi figurate dimensiuni (cm) 30 x 30, cantitate placi la 1m2 egala cu 11 buc.
	m2	500,00	
 34	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) ( Placi din beton, pentru trotuare din beton prefabricat ECO ) Placi figurate dimensiuni (cm) 30 x 30, cantitate placi la 1m2 egala cu 11 buc.
	m2	500,00	
 35	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)    (  Fara  pavaj ) Placi figurate dimensiuni (cm) 30 x 30, cantitate placi la 1m2 egala cu 11 buc.
	m2	2.000,00	
 36	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi noi)    Piatra kosouts
	m2	100,00	
 37	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  Piatra kosouts   (Fara   Pavaj)
	m2	400,00	
 38	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)
	m	300,00	
 39	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)  (  Fara  borduri )  
	m	600,00	
 40	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)
	m	1.000,00	
 41	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)    (  Fara  borduri  )
	m	1.000,00	
 42	CA01B2
	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Приготовление бетона вручную для укладки типичными средствами, бетон класса...)
	m3	136,50	
 43	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)
	m2	200,00	
 44	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) B-15
	m3	50,00