SECȚIUNEA LUCRĂRI:
Autoritatea contractantă: Primăria municipiului Bălți (BENEFICIAR). 

Cerințe /condiții pentru caietul de sarcini.

Obiectul: Cod CPV: 45000000-6
”Lucrări de întreținere a drumurilor din municipiul Bălți”. 

1 . Descriere generală:
Este prevăzut faptul, că înainte de a purcede la executarea lucrărilor, de a prezenta informația generală a străzii agentului economic câștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului între Beneficiar și Antreprenorul general. 
Conform graficului de executare a lucrărilor de construcție și montaj, atașat la Contractul de antrepriză încheiat bilateral, Antreprenorul general va examina obiectul cu ieșirea la fața locului în comun cu reprezentanții Primăriei municipiului Bălți și a companiei care va presta serviciul de supraveghere tehnică a obiectului, în termen de 10 zile, după aprobarea contractului la  MFTR Nord. 

2.  Informaţii şi Criterii:
- prețul/costul cel mai scăzut;
- cel mai bun raport calitate-preț/calitate-cost;
- cel mai bun raport; 
- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale/curente a drumului; 
- prezența tehnicii rutiere speciale;

3. Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor:
-Termenul de executare a lucrărilor de costrucție și montaj: până la 01.12.2025. 
-Valabilitatea contractului: până la 31.12.2025. 
-Perioada de garanţie 3 (trei) ani. 
Termenul limită pentru începerea lucrărilor,  10 (zece) zile.
-Lucrul final al Antreprenorului general va fi recepționat de către comisia de recepție la terminarea lucrărilor. 
Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi Ofertantul Câştigător în termen de  5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câştigătoare;
Modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:
-Ofertă (indicarea informației cu privire la preţuri precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului).
-Cerere de participare la procedura de achiziție;
-Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani (Conform formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020  - confirmat prin semnătura electronică a participantului);
-Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Conform anexei nr. 8 la documentația standart  confirmată prin semnătura electronica a participantului);
-Grafic de  executare a lucrărilor (Conform anexei nr. 10 la documentația standart  confirmată prin semnătura electronica a participantului);
-Declarație privind experiența similară (Conform anexei nr. 12 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului, (anexate contracte încheiate însoțite de procese verbale la terminarea lucrărilor);
-Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Conform anexei nr. 13 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);
-Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (Conform anexei nr. 14 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);
-Declarație privind personalul de specialitate propus/propuşi pentru implementarea contractului (Conform anexei nr. 15 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);
-Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (Conform anexei nr. 16 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);
-Informație privind asocierea (Conform anexei nr. 17 la  documentația standard nr. 69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);
-Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras  din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
-Certificat de atestare tehnico-profesională și legitimație pentru diriginte de șantier, confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;
-Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național – valabil la data eschiderii ofertelor (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);
-Avizul Agenției Supraveghere Tehnică cu aprecieri pozitive (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);
-Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţi (Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract);
-Documentul Unic de Achiziții European (DUAE).

4. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor:
De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de către agentul economic câștigător, conform prevederii legislației RM în vigoare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:
Antreprenorul pe șantier este obligat:  
- de a limita accesul la șantier;
- de a instala panou informațional pe obiectul dat,
- de a asigura drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare,
-de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare. 
- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a ÎM ”DRCD Bălți”, transportându-le și predându-le de către Antreprenorul general: fără plată. Pe teritoriul UBA a ÎM ”DRCD Bălți”, Antreprenorului general i se va elibera documentul cu confirmarea și constatare a volumului de deșeuri livrate de către acesta.
Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996. 

6.  Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor depistate pe obiectul în cauză: 
-se constată și se radiază toate lacunele din contul Antreprenorului general, în termen de 14 (paisprezece) zile, adica: 
- lipsurile și deficiențele apărute pe parcursul executării lucrărilor de reparație pe obiect, la fel și, lucrul necalitativ al Antreprenorului general, va fi fixat de către prestatorul serviciului de supraveghere tehnică,  prin monitorizarea zilnică a obiectului. 

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi
3.Obiectul achiziţiei: ”Lucrari de intretinere a drumurilor din mun. Balti”.
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de intretinere a drumurilor din mun. Balti			
1	RpDB28С
	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	1,0000	
 2	RpDB30A
	Inlocuit placi asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment	m2	1,0000	
 3	RpDB36C
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	1,0000	
 4	RpDB36A
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	1,0000	
 5	RpDB33D
	Coborirea sau ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	
 6	RpDB33A
	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	
 7	RpDB34D
	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	1,0000	
 8	RpDB34H
	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	1,0000	
 9	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1,0000	
 10	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,0000	
 11	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,0000	
 12	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 	m2	1,0000	
 13	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 	m2	1,0000	
 14	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)	m2	1,0000	
 15	DI138A
	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase  manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa  si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в  асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным  горячей битумной эмульсией)	m2	1,0000	
 16	DI138B
	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase  manual prin stropiri succesive la cald cu bitum  si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в  асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным  битумом)	m2	1,0000	
 17	DI137A
	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile  bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,  latimea crapaturilor  de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )	m	1,0000	
 18	DI137B
	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile  bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,  latimea crapaturilor  de 3 cm: cu turnator manual de rosturi  ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов )	m	1,0000	
 19	DI137C
	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile  bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,  latimea crapaturilor  de 3 cm: manual  ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки )	m	1,0000	
 20	DI136A
	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta  si ciment: h-6cm	m2	1,0000	
 21	DI136B
	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta  si ciment: h-10 cm	m2	1,0000	
 22	DI136C
	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta  si ciment: h-15 cm	m2	1,0000	
 23	DI158B
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm 	m2	1,0000	
 24	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm 	m2	1,0000	
 25	DI158C
	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1,0000	
 26	DI158D
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm 	m2	1,0000	
 27	TsH92B
	Incarcarea material frezat 	t	1,0000	
 28	TsC35A12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  21-30 m	100 m3	1,0000	
 29	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,0000	
 30	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	1,0000	
 31	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,0000	
 32	DI151A
	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu  piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	1,0000	
 33	DI142A
	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate   cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный  ремонт поврежденных участков щебнем  толщиной 2 см и  битумной эмульсией) 	m2	1,0000	
 34	DI143A
	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate  cu piatra anrobata  h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2	1,0000	
 35	DI144A
	Repararea gropilor  din  imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm	m2	1,0000	
 36	DI144B
	Repararea gropilor  din  imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm	m2	1,0000	
 37	DI144C
	Repararea gropilor  din  imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm	m2	1,0000	
 38	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 	m2	1,0000	
 39	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm 	m2	1,0000	
 40	DI155C
	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm 	m2	1,0000	
 41	DI155D
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1,0000	
 42	DI155E
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1,0000	
 43	DI155F
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm 	m2	1,0000	
 44	DI155G
	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm 	m2	1,0000	
 45	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,0000	
 46	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	1,0000	
 47	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,0000	
 48	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,0000	
 49	DB01D
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,0000	
 50	DI137A
	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile  bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,  latimea crapaturilor  de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )	m	1,0000	
 51	RpAr7A
	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	1,0000	
 52	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0000	
 53	DB12A
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere manuala (AB31,5) 	t	1,0000	
 54	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	1,0000	
 55	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	1,0000	
 56	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,0000	
 57	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1,0000	
 58	DF58A
	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m 	m2	1,0000	
 59	DF57A
	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	1,0000	
 60	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,0000	
 61	RpDC01A
	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri de clasele I-IV, piste aeroportuare, strazi, etc. executate in doua straturi (de rezistenta si de uzura) avind grosimea totala de 14 cm	m2	1,0000	
 62	RpDC01B
	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri de clasele I-IV, piste aeroportuare, strazi, etc. executate in doua straturi (de rezistenta si de uzura) avind grosimea totala de 18 cm	m2	1,0000	
 63	RpDC01C
	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri de clasele I-IV, piste aeroportuare, strazi, etc. executate in doua straturi (de rezistenta si de uzura) avind grosimea totala de 20 cm	m2	1,0000	
 64	RpDC03A
	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 15 cm	m2	1,0000	
 65	RpDC03B
	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 18 cm	m2	1,0000	
 66	RpDC03C
	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 20 cm	m2	1,0000	
 67	RpDC03D
	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 23 cm	m2	1,0000	
 68	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,0000	
 69	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	1,0000	
 70	DC07A
	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei  rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	1,0000	
 71	DI04A
	Repararea degradarilor si umplerea gropilor la imbracaminti asfaltice cu mixtura stocabila, turnat intr-o repriza, pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune	t	1,0000	
 72	DI114
	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,0000	
 73	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice 	100 m3	1,0000	
 74	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0000	
 75	DI100
	Decaparea pamintului de cat. I cu screper, cu deplasarea pina la 100m 	100 m3	1,0000	
 76	DI127
	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,0000